정책실명제 중점관리 대상사업 내역서

①사업부서	도시과	②담당자 (연락처)	시설5급 김종명 (042-608-6410) 시설9급 안강식 (042-608-5374)
③정책사업명	장동 욕골지구 새뜰마을사업
④선정기준	10억원 이상 예산투입 사업	⑤사업기간	2015년 ~ 2018년
⑥주요내용	▢ 사업개요 ○ 사업위치 : 장동 344-5번지 일원 ○ 사업기간 : 2015년 ~ 2018년(국비 2,807, 시비 278, 구비 647) ○ 사 업 비 : 3,732백만원 ○ 사업내용 − (안전확보사업) 골목길 핸드레일 설치, 방범용 CCTV, 가로등 설치 등 − (인프라사업) 골목길․하수도 정비(LPG배관망 구축사업), 공동작업장 설치 − (일자리․문화) 마을 주민 주도의 골목길 스토리 텔링 − (집수리) 기초생활수급자 및 차상위계층 주택 수리 20가구 − (공동홈) 독거노인등을 위한 노인공동생활 가정공간 신축 − (지역주민 역량강화) 주민대학운영 및 마을신문 제작 지원 ▢ 추진상황 ○ ‘15. 01. 21 : 공모사업 신청서 제출(區 ⇨ 市 정책기획관) ○ ‘15. 02. 16 : 공모사업 서면심사 통과(지역발전위원회, 국토교통부, 외부전문가) ○ ‘15. 03. 24 : 취약지역 생활여건 개조 프로젝트 공모사업 결과 발표(선정) ○ ‘15. 04. 06 : 지역발전위원회 주관 합동 워크샵 ○ ‘15. 04. 27 : 취약지역 생활여건 개조사업 2015년도 예산 가내시(857백만원) ○ ‘15. 05. 01 : 취약지역 생활여건 개조사업 컨설팅 ○ ‘15. 06. 10 : 마스터플랜 수립용역 용역비 확보 / 200백만원(1추) ○ ‘15. 12. 28 : 마스터플랜 수립 및 실시설계 용역 착수 ○ ’15. 12. 29 : 마스터플랜 수립 및 실시설계 용역 착수보고회 ○ ’16. 02. 04 : 주민대학 개강식 ○ ’16. 02. 17 : 중앙지원단 현장방문 ○ ‘16. 03. 17 : 주민대학 졸업식 ○ ‘16. 04. 11 : LPG배관망 및 핸드레일 설치사업 추진 승인 / 국토교통부 ▢ 향후 추진계획 ○ ‘16. 04. : LPG배관망 구축사업 실시설계 용역 및 핸드레일 설치사업 발주 ○ ‘16. 12. : 골목길 핸드레일 설치사업 완료 ○ ‘17. 12. : LPG배관망 구축사업 사업 완료 ○ ‘18. 12. : 장동 새뜰마을사업 완료