정책실명제 중점관리 대상사업 내역서

①사업부서	도시과	②담당자 (연락처)	시설5급 김종명 (042-608-6410) 시설7급 소정희 (042-608-5112)
③정책사업명	연축지구(행정타운) 도시개발사업 도시관리계획변경(GB해제) 용역
④선정기준	5천만원 이상의 용역사업	⑤사업기간	2015. 10. ~ 2017. 03.
⑥주요내용	□ 사업개요 ○ 사업위치 : 대덕구 연축동 일원 ○ 면 적 : 30만㎡ / 사업방식 : 사용 또는 수용방식 ○ 인구수용계획 : 세대수 2,200, 인구수 5,200명 ○ 사 업 비 : 1,200억원 / 사업기간 : 2015년 ~ 2021년 ○ 용 역 비 : 94백만원 / 용역기간 : ‘15.10.01.~’17.3.23. / 선구ENG □ 추진상황 ○ ‘09. 10. : 개발행위 허가제한 및 지형도면 고시 ○ ‘09. 10. ~ ’14. 10. : GB해제 및 도시개발사업추진 / 102㎡ ○ ‘14. 10. 17. : 개발행위허가 제한 해제 고시 ○ ‘15. 05. 06. : 개발제한구역 규제완화 발표(국토부) 30만㎡이하 지방이양 ○ ‘15. 08. 10. : 연축지구 추진계획 수립 ○ ‘15. 10. 01. : 개발제한구역 해제 용역 착수 ○ ‘15. 10. 30. : 연축지구 정책간담회 및 착수보고회 개최 ○ ‘15. 11.~ ‘16. 04. : 실무추진단(T/F) 간담회(4회)/ 시, LH, 도시공사 ○ ‘16. 04. : 토지이용계획(안) 및 구역계 설정 검토 중 □ 향후 추진계획 ○ ‘16. 04. 27. : 용역 중간보고 개최 ○ ‘16. 06. : 도시관리계획 변경(안) 입안 / 市 도시계획과 ○ ‘16. 12. : 도시관리계획 변경(GB 해제) 고시 및 용역 준공 ○ ‘17년 상반기 : 도시개발구역 지정 / ’17년 하반기 : 토지보상 등 ○ ‘18년 하반기 : 단지조성 공사착공 ○ ‘21년 하반기 : 사업완료