정책실명제 중점관리 대상사업 내역서

①사업부서

건설과

②담당자

(연락처)

시설5급 서준원

(042-608-6450)

시설7급 문병진

(042-608-5222)

③정책사업명

장동 처리분구 하수관로 정비사업 실시설계용역

④선정기준

5천만원 이상의 용역사업

⑤사업기간

2016. 4. ~ 9.

⑥주요내용

□ 사업개요

○ 위    치 : 대덕구 장동 일원(욕골, 진골, 텃골, 새뜸, 산디마을)

○ 사 업 량 : 하수관로 정비 D=200~300mm, L≒9.09㎞

○ 사업기간 : 2016. 04. ~ 2018. 12.

□ 추진상황

○ 2013. 02. : 2013년 대전광역시 하수도정비 기본계획 반영

○ 2013. 03. ~ 2015. 03. : 하수도 국고보조사업 예산 신청(3회)

○ 2015. 10. : 2016년 하수도사업 국·시비보조금 결정(1,667백만원)

□ 추진계획

○  2016. 04. ~ 09. : 실시설계, 재원조달 및 사용협의, 원가심사 등

행정절차 이행

○ 2016. 10. ~ 2018. 12. : 공사 추진

□ 소요예산 : 6,021백만원(국비 1,806 / 시비 4,215)

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2016	2017	2018	향후	비고
계	6,021	-	1,667	2,177	2,177	-
국고보조	1,806	-	500	653	653	-
시 비	4,215	-	1,167	1,524	1,524	-