[별지 제1호서식]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	도시과	②담당자(전화번호)	송연화 (608-6873)
③정책사업명	미호동 舊 대청파출소부지 주민이용공동시설 설치
④선정기준		⑤사업기간	2013~2016
⑥주요내용	□ 사업목적 - 대청호 진입로에 위치하여 주변의 수려한 경관과 부조화 및 흉물로 방치되어 우리구와 마을 이미지 훼손 방지 - 舊 대청파출소 부지 매입후 공동시설로 활용하여 주민 소득 증대와 복지증진에 기여 □ 사업개요 - 위 치 : 대덕구 미호동 262-4번지 - 사업량 · 대지면적 : 626.0㎡ · 규 모 : 지상 2층 · 연 면 적 : 284.1㎡ · 용 도 : 제1종 근린생활시설 ‣ 1층 : 편의점, 공판장 ‣ 2층 : 다목적실 - 사업비 : 950백만원(금강수계기금 750, 댐지원사업비 200) □ 추진상황 - ‘13.09. : 舊 대청파출소 부지매입 필요성 주민제기 - ‘14.10. : 댐지원사업비(대청댐관리단) 지원요청 - ‘14.12. : 2014년 본예산편성(댐지원사업비 150백만원) - ‘14.05.09 : 국유재산 매각 승인(기재부) / 감정액 270백만원 - ‘14.06.22 : 국유재산 매입대금(1차)지급(150백만원) - ‘14.08.30 : ‘15년 상수원특별지원 공모사업 신청 / 금강청 - ‘14.12.05 : 상수원특별지원 공모사업 승인 / 750백만원(2년간) - ‘15.02.25 : 대청파출소 부지 매입 완납 - ‘15.12.29 : 지장물 철거공사 완료 - ‘16.02.12 : 건축 설계 용역 완료 - ‘16.05.10 : 주민이용공동시설 신축공사 착공 □ 향후계획 - ‘16.11.05 : 주민이용공동시설 신축공사 완료