정책실명제 사업관리이력서

등록번호	2016-15	담당부서 (송연화)	안전도시국 / 도시과 (정희찬 / 608-6873)
정 책 명	주민이용공동시설 신축공사
사업개요	□ 추진배경 및 목적 ○ ‘15년 근강수계 상수원보호구역 특별지원사업에 선정되어 미호동 주민이용공동시설을 건립 추진한 사업으로서 상수원보호구역 내 마을이미지 개선과 주민복지 증대 및 지역 주민의 경제 활성화 □ 사업개요 ○ 위 치 : 대덕구 미호동 262-4번지 ○ 사 업 량 : 보도신설 및 정비(L=127m, B=2~6m) - 대지면적 : 626.0㎡ - 규 모 : 지상 2층 - 연 면 적 : 284.1㎡ - 용 도 : 제1종 근린생활시설 ‣ 1층 : 농산물 공판장, 편의점 등 ‣ 2층 : 회의실 등 다목적실 ○ 총사업비 : 950백만원(기금 750백만원, 댐비 200백만원) ○ 사업기간 : 20115.01. ~ 2016.12. □ 주요 추진사항 ○ 2015. 02. 25. : 대청파출소 부지 매입 완납 ○ 2015. 02. 29. : 지장물(대청파출소) 철거공사 완료 ○ 2016. 02. 12. : 건축 설계 용역 완료 ○ 2016. 05. 10. : 주민이용공동시설 신축공사 착공 ○ 2016. 11. 07. : 주민이용공동시설 신축공사 준공
사업관련자	□ 사업관련자 현황 ○ 2015.7.17. : 실시설계 계약의뢰 - 주무관 황인성, 도시정비담당 조성운, 도시과장 길금돈 ○ 2016.2.12. : 실시설계용역 준공 - 용역감독 송연화, 검토 도시과 조성운, 전결 도시과 김종명 ○ 2016.4.4. : 추경예산 성립전 사전사용계획 - 도시과/ 주무관 송연화, 도시계획담당 이근희, 도시과장 김종명 안전도시국장 박현대 ○ 2016. 05. 10. : 신축공사 감리용역착공 / 조명공사 포함 - 도시과 주무관 송연화, 도시과 주무관 김봉찬 ○ 2016. 11. 07 : 신축공사 감리용역완료 및 준공 / 조명공사 포함 - 도시과 주무관 송연화, 안전총괄과 주무관 최 준 - 자치행정과 주무관 송신순, 도시과 주무관 김봉찬