정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	도시과	②담당자 (연락처)	시설5급 문성운 (608-6410) 시설7급 오지영 (608-5112)
③정책명	새뜸마을안길 도로확장공사
④선정기준	구정의 주요 정책사업	⑤사업기간	2017. 01. ~ 2018. 12.
⑥주요내용	□ 사업개요 ❍ 위 치 : 대덕구 장동 790-2번지 일원 ❍ 사업기간 : 2017. 01. ~ 2018. 12. ❍ 사업규모 : 도로 확·포장 L=261m, B=6m, 주차장 조성 A=160㎡ ❍ 사 업 비 : 900백만원(’16년 2회 추경 600, ’17년 이후 300) □ 추진상황 ❍ ’11. 07. 22. : 회덕동 발전종합계획 미반영(안행부) ❍ ’14. 10. . : 주한미군 공여구역 발전종합계획 반영 건의 ❍ ’14. 11. . : 회덕동 취락지역 도시계획시설사업 특별교부세 요청 ❍ ’15. 01. . : 공여구역 발전종합계획 변경 미반영 통보(안행부→시) ❍ ’15. 10. . : 특별교부세 지원 건의 / 행자부 ❍ ’16. 08. . : 특별교부세 지원 건의 / 행자부 ❍ ’16. 11. 02. : 특별교부세 교부 결정 통보(행자부→시→구) ❍ ’16. 12. . : 2016년 제2회추경 편성(600백만원) ❍ ’17. 01. 18. : 실시설계용역 착수 ❍ ’17. 03. 15. : 실시설계용역 일시정지 / 지구단위계획 변경 필요 ❍ ’17. 04. 06. : 대덕구 새뜸지구 지구단위계획 변경 용역 착수 □ 향후 추진계획 ❍ ’17. 07. . : 지구단위계획 변경용역 및 실시설계용역 완료 ❍ ’17. 07.~ 12. : 행정절차·실시계획고시 및 보상추진 ❍ ’18. 01.~ 12. : 공사 발주 및 완료 □ 사업관련자 현황 ❍ 도시과 주무관 오지영, 행정타운조성담당 류 현, 과장 문성운