정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	사회복지과	②담당자 (연락처)	행정5급 전덕표 (608-6330) 사회7급 장돈경 (608-6774) 시설8급 박장규 (608-6393)
③정책명	노인복지회관 리모델링
④선정기준	10억원 이상의 에산이 투입되는 사업	⑤사업기간	2017. 1. ~ 2017. 11.
⑥주요내용	□ 사업개요 ○ 위 치 : 신탄진로 681번길 6(덕암동) ○ 연 면 적 : 580.58㎡(지상 2층 : 176평 / 철근콘크리트) ○ 사업기간 : 2017. 1. 9. ~ 11. 13. / 270일 ○ 사업내용 : 노인지회 철거 후 증축 및 보훈회관 리모델링 ○ 주요시설 : 강당, 사무실, 프로그램실 등 ○ 사 업 비 : 1,150백만원(특별교부세 300, 특별교부금 300, 구비 550) ※ 미확보액 구비(특별교부금) 350백만원 2017년 제1회 추경 확보 예정 □ 추진상황 ○ ′15. 5. 7. : 특교세 300백만원 확보 ○ ′15. 5. 12. : 공약사항 변경 - 노인지회‧보훈회관 신축 ⇨ 노인복지회관 리모델링 ○ ′15. 9. 22. : 특교금 300백만원 확보 ○ ′16. 6. 1. : 구비 200백만원 확보 ○ ′16. 8 ~ 11. : 기본 및 실시설계 용역 준공 및 계약심사 등 행정절차 이행 ○ ′16. 12월 : 입찰 공고 및 계약 ○ ′17. 1. 9. : 착공 □ 향후 추진계획 ○ ′17. 5월중 : 사업비 350백만원 제1회 추경 확보 예정 ○ ′17. 11. 13. : 준공 ○ ′17. 12월 : 준공식 개최 □ 사업관련자 현황 ○ 사회복지과 주무관 장돈경, 박장규 노인복지담당 류지홍, 복지시설담당 이영희, 사회복지과장 전덕표