정책실명 공개과제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2017-6	담당부서 작성자	(안전도시국 / 공원녹지과) (이호연 / 608-5132)
정 책 명	안산근린공원 재정비사업
사업개요	○ 추진배경 - 시설 노후화로 안전사고 위험 및 휴식 공간 부족한 공원을 리모델링을 통하여 안전하고 쾌적하게 재조성하여 주민 편익 증진 및 이용률 제고 ○ 추진기간 : 2017. 1 ~ 10. ○ 총사업비 : 496백만원 ○ 주요내용 - 공원 재정비 A=13,520㎡ / 야외 스탠드 1개소, 사면훼손지 복구, 데크계단 및 난간설치, 운동시설 교체, 배수로 정비, 경관 수목 식재 등
추진경과 및 사업 관련자	□ 사업관련자 현황 ○ 17. 1. 24. : 공원 정비계획 수립 - 관련자 : 공원녹지과 주무관 노윤주, 공원담당 석주현, 과장 박영철, 국장 박현대, 부구청장 김영호, 구청장 박수범 ○ 17. 2. 1. : 도시관리계획 결정(변경) 및 실시설계 용역 착수 - 관련자 : 공원녹지과 주무관 노윤주, 공원담당 석주현, 과장 박영철, 국장 박현대 ○ 17. 3. 28. : 도시관리계획 결정(변경) 및 지형고시 - 관련자 : 대전광역시 공원녹지과 주무관 맹용호, 공원조성담당 방병욱, 과장 이범주 ○ 17. 5. 24. : 도시계획시설사업 실시계획인가 고시 - 관련자 : 대전광역시 공원녹지과 주무관 맹용호, 공원조성담당 방병욱, 과장 이범주 ○ 17. 6. 13. : 안산근린공원 재조성사업 착공 - 관련자 : 공원녹지과 주무관 이호연, 공원담당 이재만, 과장 박영철 ○ 17. 10. 10. : 안산근린공원 재조성사업 준공 - 관련자 : 공원녹지과 주무관 이호연, 공원담당 이재만, 과장 박영철, 국장 박현대 ○ 17. 10. 26. : 준공식 - 관련자 : 공원녹지과 주무관 이호연, 공원담당 이재만, 과장 박영철, 국장 박현대, 부구청장 임찬수, 구청장 박수범