정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	이촌마을 도로확·포장공사
② 추진배경	○ 개발제한구역 내 도로개설로 지역 주민들의 차량 통행불편 해소 및 관광객 유치를 통한 소득증대 기여
③ 사업개요	○ 사업위치 : 대덕구 삼정동 산9-3번지 일원 ○ 사업개요 : 도로확·포장 L=418m, B=10~14m ○ 사 업 비 : 1,500백만원 ○ 사업기간 : 2018 ~ 2019
④ 사업부서	도시재생과	⑤ 담 당 자	송연화 (부서장 길금돈)
⑥ 선정기준	10억원 이상 예산이 투입되는 사업	⑦ 사업기간	2018 ~ 2019
<그간 주요 추진내용> ○ 2018. 2. 9. : 도시관리계획 결정 및 실시설계용역 착수 ○ 2018. 8. 7. : 도시관리계획 결정 및 실시설계용역 완료 ○ 2019. 1. 2. : 보상계획공고 ○ 2019. 3. 5. : 이촌마을 도로확·포장공사 외 3건 착공 ○ 2019. 3. 14. : 보상협의(1차) / 8건, 63백만원 ○ 2019. 3. 19. : 지장물 이설 및 보상협의 기간 소요에 따른 공사 등 일시정지 ○ 2019. 4. 15. : 보상협의(2차) / 6건, 45백만원