정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	주민과 함께 가꾸는 마을 공유정원 조성
② 추진배경	○ 민간과 공공이 협업하여 공유정원 운동을 통한 도시재생 추진
③ 사업개요	○ 사업내용 - 도시숲 조성사업(쌈지공원 등 3개사업) - 어린이공원 정비(6개소 / 학댕이·봉촌·신탄·새터·등마루·송촌) - 1단체1공원 가꾸기(144개 단체 참여 / 89개소) - 실버일자리 창출(공원내 공중화장실 청소) - 미세먼지 차단숲 조성(대덕산업단지 주변) 20,000㎡ ○ 사 업 비 : 4,902백만원(국 1,315, 시 1,132, 구 2,455)
④ 사업부서	공원녹지과	⑤ 담 당 자	이호연, 도혜진 (부서장:고중필)
⑥ 선정기준	구청의 주요 정책사업	⑦ 사업기간	2019.1. ~ 12.
<그간 주요 추진내용> ○ 도시숲 조성(3개소) -‘19. 1. ~ 3. : 실시설계용역 추진 -‘19. 3. ~ 5. : 쌈지공원(덕암동 336), 녹지광장리모델링(신대동 228-5), 마을마당 조성(법동 370) 조성 완료 ○ 어린이공원 정비 추진(6개소) -‘18. 11.~’19. 2. : 학댕이‧봉촌‧신탄어린이공원 실시설계용역 및 도시관리계획 결정(변경) -‘19. 2. ~ 4. : 어린이생태체험공간조성(새터․등마루) 실시설계 및 도시관리계획 결정(변경) -‘19. 3. ~ : 학댕이‧봉촌‧신탄어린이공원 재조성공사 추진 -‘19. 4. ~ : 송촌어린이공원 리모델링 사업 설계용역 발주 ○ 1단체1공원가꾸기 추진 -‘19. 1. : 살기좋은 마을 조성을 위한 1단체1공원가꾸기 추진계획 수립 -‘19. 2. ~ : 1단체1공원 가꾸기 추진 ○ 실버일자리 창출(공원 내 공중화장실 청소) -‘18. 12. : 공원 내 화장실 청소 및 환경정비 인력 모집(40명) -‘19. 1. ~ : 인력 배치, 청소 및 환경정비 추진 ○ 미세먼지 차단숲 조성 -‘19. 2. : 미세먼지 차단숲 조성 추진계획 수립 -‘19. 2.~ 5. : 기본 및 실시설계 용역 추진 -‘19. 3. 25. : 미세먼지 차단숲 조성 관련 자문회의 개최(안전도시분과위원회/환경분야) -‘19. 4. 2. : 산․학․관 업무협약(대덕산업단지관리공단, 충남대 수목진단센터, 대덕구)

○ 2019년 공중화장실분야 기간제근로자 선발․운영 계획	‘18.12.12.	이진산 국장 박영철 과장 이재만 담당 이미라 주무관
○ 살기좋은 마을 조성을 위한 2019년도 1단체1공원가꾸기 추진계획	‘19.01.14.	박정현 구청장 한필중 부구청장 문성운 도시재생과장 고중필 과장 이재만 담당 도혜진 주무관
○ 미세먼지 차단숲 조성사업 추진계획	‘19.02.01.	박정현 구청장 한필중 부구청장 문성운 도시재생과장 고중필 과장 김영락 담당 이호연 주무관
○ 학댕이·봉촌·신탄어린이공원 도시관리계획(공원조성계획)결정(변경) 검토보고	‘19.02.07.	한필중 부구청장 문성운 국장 고중필 과장 이재만 담당 도혜진 주무관
○ 미세먼지 차단숲 조성 업무협약 추진계획	‘19.03.29.	박정현 구청장 한필중 부구청장 문성운 국장 고중필 과장 김영락 담당 이호연 주무관
○ 새터·등마루어린이공원 도시관리계획(공원조성계획) 결정(변경) 검토보고	‘19.04.30.	한필중 부구청장 문성운 국장 고중필 과장 이재만 담당 도혜진 주무관