정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명

경부선(회덕~조차장간) 장등천교 개량사업

② 추진배경

○ 장등천가도교 주요부재 결함 발생 등 안전등급“D”등급 판정

○ 가도교 재해예방 및 이용주민의 통행불편 해소를 위해 개량 필요

③ 사업개요

○ 위  치 : 대덕구 읍내동 526-16번지 일원

○ 사업내용 : 가도교 개량(L=9m, B=14m) 2개소(상・하행)

○ 사업비 : 10,000백만원(공사 7,000, 보상 3,000)

구 분	사 업 비 (단위 : 백만원)			비고
	합 계	공사비	보상비
합 계	10,000	7,000	3,000
철도시설공단	5,250	5,250 (75%)		국 비
대 덕 구	4,750	1,750 (25%)	3,000 (100%)	시 비

④ 사업부서

- 한국철도시설공단(공사추진)

- 대덕구 건설과(보상 등 행정업무)

⑤ 담 당 자

황인성

(부서장: 박희종)

⑥ 선정기준

10억원 이상의 예산이 투입되는 사업

⑦ 사업기간

2019.3.~2022.3.

<그간 주요 추진내용>

○ 2017. 07. 17. : 협약체결(대덕구, 대전시, 한국철도시설공단)

○ 2017. 12. 12. : 실시설계용역 추진 / 한국철도시설공단

○ 2018. 04. 30. : 2018년도분 사업비 분담금 지급

○ 2018. 06. ~ 08. : 사업추진에 따른 협의 / 대덕구, 철도시설공단

○ 2018. 11. 30. : 실시설계용역 준공

○ 2019. 03. 15. : 공사 착공

○ 2019. 05. ~ 2020. 3. : 기존 구거 이설 작업 중

○ 장등천가도교 개량사업 업무협약식 개최

‘17.07.17.

권선택 대전광역시장

박수범 구청장

이동렬 철도시설공단 충청본부장

○ 경부선 장등천교 개량사업 분담사업비 지급 (4,000백만원)

‘18.04.20.

‘19.06.24.

박정현 구청장

한필중 부구청장

길금돈 국장

박희종 과장

황인성 주무관