정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	효자지구(1단계) 주거환경개선사업
② 추진배경	○ 기반시설이 극히 열악하고 노후·불량 건축물이 과도하게 밀집한 지역의 주거환경을 개선하여 도시기능 회복 및 지역 균형발전 도모
③ 사업개요	○ 위 치 : 대덕구 읍내동 240번지 일원 ○ 사업기간 : 2007 ~ 2024 ○ 구역면적 : 6만2천㎡ ○ 사업계획 : 공동주택 1,620세대(분양 1,296, 임대 324) 건설 ○ 사업시행자 : 한국토지주택공사(LH) + 계룡건설 등 민간컨소시엄
④ 사업부서	대전광역시 도시계획과	⑤ 담 당 자 (부 서 장)	시설7급 최무선 (시설5급 박남철)
⑥ 선정기준	국민신청	⑦ 사업기간	2007 ~ 2024
<그간 주요 추진내용> ○ ‘07. 03. 02. : 효자지구 주거환경개선사업 정비구역 지정 고시 ○ ‘07. 08. 07. : 사업시행 협약 체결 / 區↔LH ○ ‘18. 07. 18. : 정비계획(변경) 결정 및 정비구역 지정 고시 - 민간사업자 반영, 1단계(공동주택) 2단계(마을정비형 공공주택) 조정 ○ ‘19. 04. 25. : 공동사업시행자 협약 체결 / LH↔계룡건설 컨소시엄 ○ ‘19. 09. 18. : 교육환경보호위원회 심의 / 원안 가결(대전시 교육청) ○ ‘20. 04. 13. : 주거환경개선사업 보조금(928백만원) 교부 市→區 - 도로개설사업비(시비 6,200백만원) 점진적(연차별)으로 지원 예정 ○ ‘20. 05. 29. : 정비계획(변경) 결정 및 정비구역 지정 고시 <향후계획> ○ ‘20. 08. : 교통영향평가위원회 심의 ○ ‘20. 하반기 : 건축·경관 공동심의 등 각종 행정절차 이행 ○ ‘21. 상반기 : 사업시행 인가(예정) ○ ‘21. 하반기 : 보상계획 공고(예정) ○ ‘22. ~ ‘24. : 지장물 철거 및 공사 추진 ※ 상기사항은 각종 행정절차 이행 결과에 따라 시기가 변동될 수 있음.