정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	효자구역(1단계) 주거환경개선사업(기존사업)
② 추진배경	기반시설 정비 및 공동주택 건설을 통한 노후 불량주택 밀집지역의 열악한 주거환경을 개선하고 주민 삶의 질 향상 도모
③ 사업개요	위 치 : 대덕구 읍내동 240번지 일원 사업기간 : 2007. ~ 2029. 구역면적 : 6만6천㎡ 사업계획 : 공동주택 1,620세대(분양 1,296, 임대 324) 사업시행자 : 대덕구, LH, 계룡건설 등 민간컨소시엄
④ 사업부서	도시계획과				⑤ 담당자	시설8급 이희지 (시설5급 조성운)
⑥ 선정기준	기타				⑦ 사업기간	2007. ~ 2029.
<그간 주요 추진내용>
○ 효자지구 주거환경개선사업 정비구역 지정 고시(市)			‘07.03.02.		정비구역 및 정비계획 지정 고시 알림(市→區)
○ 효자지구 주거환경개선사업 시행계획 협약 체결(區↔LH)			‘07.08.07.		시행협약서 날인 송부(區→LH) 정진명 과장 한성수 담당 전종현 주무관
○ 효자구역 정비계획(변경) 결정 및 정비구역 지정 고시(市)			‘18.07.18.		정비계획(구역지정) 변경 고시 알림(市→區)
○ 효자구역 주거환경개선사업 공동시행 협약 체결(LH↔민간컨소시엄)			‘19.04.25.		공동시행 협약 체결(LH↔계룡건설, 대우건설, 태영건설)
○ 교육환경보호위원회 심의(市 교육청)			‘19.09.21.		교육환경평가 권고사항 조치계획 송부(市 교육청→區)
○ 효자구역 정비계획(변경) 결정 및 정비구역 지정 고시(市)			‘20.05.29.		정비계획(변경) 결정 및 정비구역 지정 고시 알림(市→區)
○ 효자구역 정비계획(변경) 결정 및 정비구역 지정 고시(市)			‘21.04.07.		정비계획(변경) 결정 및 정비구역 지정 고시 알림(市→區)
○ 사업시행인가 고시		‘22.08.26.		사업시행계획인가(區)
○ 보상계획 및 열람공고		‘23.12.29.		보상계획 및 열람공고(LH)
○ 보상협의회 설치⸱구성		‘24.01.11.		보상협의회 설치⸱구성계획 보고 이성규 부구청장 지인권 국장 곽효상 과장 문병진 팀장 박호준 주무관
○ 보상협의회 위원 위촉		‘24.01.31.		보상협의회 위원 위촉 검토보고 이성규 부구청장 지인권 국장 곽효상 과장 문병진 팀장 박호준 주무관
○ 보상협의회 개최		‘24.02.27.		제1차 보상협의회 개최(區)
○ 보상협의회 결과		‘24.02.29.		제1차 보상협의회 결과보고 이성규 부구청장 지인권 국장 곽효상 과장 문병진 팀장 박호준 주무관
○ 감정평가 추진		‘24.04.~05.		감정평가 추진(LH)
○ 보상협의회 위원 위촉(변경)		‘24.05.23.		보상협의회 위원 위촉(변경) 검토보고 이성규 부구청장 지인권 국장 곽효상 과장 문병진 팀장 박호준 주무관
○ 보상협의회 개최		‘24.06.04.		제2차 보상협의회 개최(區)
○ 보상협의회 결과		‘24.06.05.		제2차 보상협의회 결과보고 이성규 부구청장 지인권 국장 곽효상 과장 문병진 팀장 박호준 주무관
○ 수용재결신청에 따른 열람공고		‘25.02.19.		수용재결신청서 열람공고(1차 ~ 4차)
○ 보상협의 공고문(공시송달) 공고		‘25.03.16.		보상협의(공시송달) 공고 (토지151건, 지장물 469건)
○ 수용재결신청에 따른 열람공고		‘25.06.23.		수용재결신청서 열람공고(5차)