정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	임도신설사업
② 추진배경	산림재해(산불·산사태) 대응
③ 사업개요	산불예방임도 1.87km
④ 사업부서	공원녹지과		⑤ 담당자	녹지7급 최준호 (부서장:문영호)
⑥ 선정기준	대규모 예산		⑦ 사업기간	2024. 1. ~ 2026. 12.
<그간 주요 추진내용> □ (2023. 8.) 용호-갈전 노선(4km) 타당성 평가 完 → (불가 사유) 국방부 협의 결과 폭발물 관련 제한보호구역 내 사업 불가 통보 □ (2024. 2.) 용호-삼정(2km) 대안 노선 발굴 → (불가 사유) ‘24. 3월, 8월, 9월(3차)에 걸쳐 동의 추진하였으나 토지주 동의률 저조로 불가 □ (2024. 2.) 장동 노선(0.37km) 노선 발굴 → (추진 중)‘24. 4월 동의 추진 완료 / 24. 8월 타당성평가 완료 /‘24. 12월 설계용역 / ‘25. 2월 ~ 5월 행정절차 이행 완료 /‘25. 6월 ~ 11월 사업 추진 예정 <연내 준공 목표> □ (2025. 4.) 용호-삼정(1.5km), 이현-갈전(1.5km) 노선 발굴 → (불가 사유) 동의 추진 하였으나, 토지주 동의율 저조로 불가 □ (2025. 5.) 평촌-신탄(1.5km) 노선 발굴 → (추진 중) ‘25. 2월 ~ 6월 동의 추진 중 / 상반기 중으로 동의 및 실시설계 용역 발주 및 하반기 사업 추진 예정 <연내 준공 목표>
2024년 산림복지 및 재해예방사업 추진계획 (공원녹지과-811호(2024. 1. 16.)		‘24.01.16	최충규 대덕구청장 노기수 대덕구부구청장 곽효상 도시건설국장 이우걸 공원녹지과 박성언 주무관
2024년 임도신설사업 집행품의 & 계약의뢰 (공원녹지과-9840호(2025. 6. 4.))		‘25.06.04	최충규 대덕구청장 노기수 대덕구부구청장 곽효상 도시건설국장 노윤주 공원녹지과장 代 최준호 주무관
산림재해 예방·대응을 위한 임도신설사업 (공원녹지과-11133호(2025. 6. 26.))		‘25.06.26	최충규 대덕구청장 노기수 대덕구부구청장 곽효상 도시건설국장 김영락 공원녹지과장 代 최준호 주무관