정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	중리미래 공영주차장 입체화사업
② 추진배경	주변지역 주차난으로 인한 주민불편 해소
③ 사업개요	주차장명 : 중리미래 공영주차장 위 치 : 대덕구 중리동 363-23 규 모 : 지상1층~지상2층 3단(주차 97면) 사 업 비 : 4,300백만원(시비 1,500, 구비2,800)
④ 사업부서	교통과		⑤ 담당자	시설7급 염다경 (부서장: 이정순)
⑥ 선정기준	대규모예산		⑦ 사업기간	2023.1.~2025.11.
<그간 주요 추진내용>
○‘22. 10. : 2023년 주차환경개선사업 선정 / 市운송주차과→교통과 ○‘23. 04. : 기본 및 실시설계용역 착수(완료 `24. 06.) ○‘23. 07. : 기본 및 실시설계용역 주민설명회 / 중리동 행정복지센터 ○‘24. 03. : 중리1지구 지구단위계획 결정(변경) 고시 / 市 고시 제2024-67호 ○‘24. 04. : 건축인허가 수리 및 실시계획인가 고시 / 區 고시 제2024-45호 ○‘24. 06. : 市 계약심사 및 區 일상감사 완료 ○‘24. 07. : 공사 및 용역 착수 ○‘25. 02. : 철재 골조공사 완료 ○‘25. 03. : 철근조립 및 콘크리트 타설 완료 ○‘25. 06. : 외부패널(폴리패널 및 복합패널 등) 설치 완료 ○‘24. 07. : 지붕층 도막방수 및 L형측구 시공 완료
○ 주차시설확충사업 추진계획 수립		‘23.01.20.	최충규 구청장 이동한 부구청장 강동구 경제환경국장 박재범 교통과장 김관수 주차시설팀장 김주회 주무관
○ 중리미래 공영주차장 입체화사업 기본 및 실시설계 용역 외 1건 발주계획 보고		‘23.02.16.	최충규 구청장 이동한 부구청장 강동구 경제환경국장 박재범 교통과장 김관수 주차시설팀장 안강식 주무관
○ 기본 및 실시설계 용역 일상감사·계약심사 완료		‘23.02.28.	박재범 교통과장 김관수 주차시설팀장 안강식 주무관
○ 중리미래 공영주차장 입체화사업 기본 및 실시설계용역 착수		‘23.04.20.	박재범 교통과장 김관수 주차시설팀장 안강식 주무관
○ 중리미래 공영주차장 입체화사업 문제점 및 대책 추진계획 보고		‘23.05.16.	최충규 구청장 이동한 부구청장 강동구 경제환경국장 박재범 교통과장 김관수 주차시설팀장 안강식 주무관
○ 중리1지구 도시관리계획(지구단위계획) 결정(변경) 용역 착수		‘23.06.07.	박재범 교통과장 김관수 주차시설팀장 안강식 주무관
○ 경관 심의 (원안가결)		‘23.10.10.	오재룡 교통과장 김관수 주차시설팀장 안강식 주무관
○ 중리미래 공영주차장 입체화사업 사업비 변경 계획 수립		‘23.11.06.	최충규 구청장 이동한 부구청장 강동구 경제환경국장 오재룡 교통과장 김관수 주차시설팀장 안강식 주무관
○ 특정공법 선정 위원회 개최 및 공법 선정		‘23.11.29.	강동구 경제환경국장 이병열 교통행정팀장 김관수 주차시설팀장 안강식 주무관
○ 市 도시계획·건축공동위원회 심의(원안수용)		‘24.02.29.	오재룡 교통과장 김관수 주차시설팀장 정희찬 주무관
○ 중리1지구 지구단위계획 결정(변경) 고시 / 市 고시 제2024-67호		‘24.03.12.	오재룡 교통과장 김관수 주차시설팀장 정희찬 주무관
○ 중리1지구 도시관리계획(지구단위계획) 결정(변경) 용역 완료		‘24.03.26.	오재룡 교통과장 김관수 주차시설팀장 정희찬 주무관
○ 건축인허가 수리 및 도시계획시설 실시계획인가 고시 / 區 고시 제2024-45호		‘24.04.12.	오재룡 교통과장 김관수 주차시설팀장 정희찬 주무관
○ 공사 市 계약심사 및 區 일상감사 완료		‘24.05.27.~06.03.	오재룡 교통과장 김관수 주차시설팀장 정희찬 주무관
○ 중리미래 공영주차장 입체화사업 기본 및 실시설계용역 완료		‘24.06.24.	오재룡 교통과장 김관수 주차시설팀장 정희찬 주무관
○ 중리미래 공영주차장 입체화공사(건축·기계, 전기, 소방, 통신) 및 용역 착수		‘24.07.26.	오재룡 교통과장 김관수 주차시설팀장 정희찬 주무관
○ 중리미래 공영주차장 입체화사업 착공식 추진계획 보고		‘24.08.16.	최충규 구청장 이성규 부구청장 김대현 경제과장 이병열 교통행정팀장 김관수 주차시설팀장 장호용 주무관
○ 중리미래 공영주차장 입체화공사 설계변경(제1회) 검토보고		‘25.01.31.	정영주 행정안전국장 설재균 경제환경국장 김관수 주차시설팀장 장호용 주무관
○ 중리미래 공영주차장 입체화공사 기성검사(제1회)		‘25.04.22.	노기수 부구청장 설재균 경제환경국장 변병락 교통과장 김관수 주차시설팀장 염다경 주무관
○ 중리미래 공영주차장 입체화공사 설계변경(제2회) 검토보고		‘25.06.13.	설재균 경제환경국장 변병락 교통과장 김관수 주차시설팀장 장호용 주무관
○ 중리미래 공영주차장 입체화공사 기성검사(제2회)		‘25.06.12.	노기수 부구청장 설재균 경제환경국장 변병락 교통과장 김관수 주차시설팀장 염다경 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	신탄진역 서측 주차환경 개선사업
② 추진배경	주변지역 주차난으로 인한 주민불편 해소
③ 사업개요	주차장명 : 신탄진역 서측 공영주차장 위 치 : 대덕구 석봉동 415-5번지 일원 규 모 : 공영주차장 확장 20면→44면 사 업 비 : 2,100백만원
④ 사업부서	대덕구 교통과		⑤ 담당자	시설7급 염다경 교통과장 이정순
⑥ 선정기준	대규모예산		⑦ 사업기간	2023.2.~2026.12.
<그간 주요 추진내용>
○‘22. 03. : 민선8기 구청장 공약 반영 ○‘22. 09. : 충청권 광역철도 주변 공영주차장 타당성 용역 추진 계획 수립 ○‘23. 02. : 타당성 조사용역 착수(`23. 10. 준공) ○‘25. 04. : 2025년 도시재정비위원회 심의 ○‘25. 06. : 신탄진 재정비촉진계획 결정(변경) 고시 / 市고시 제2025-145 ○‘25. 06. : 제2회 추경예산 반영(1,560백만원) / 실시설계 및 보상비 ○‘25. 07. : 실시설계용역 발주
○ 충청권 광역철도 관련 공영주차장 조성 타당성 용역 추진계획		‘22.09.13.	강동구 기후경제국장 박중규 교통과장 이학로 주차시설팀장 김주회 주무관
○ 충청권 광역철도 관련 공영주차장 조성 타당성 용역 착수		‘23.02.24.	박재범 교통과장 김관수 주차시설팀장 안강식 주무관
○ 충청권 광역철도 관련 공영주차장 조성 타당성 용역 완료		‘23.10.20.	오재룡 교통과장 김관수 주차시설팀장 안강식 주무관
○ 신탄진역 서측 주차환경 개선사업 추진계획 보고		‘25.04.17.	최충규 구청장 노기수 부구청장 설재균 경제환경국장 변병락 교통과장 김관수 주차시설팀장 염다경 주무관
○ 신탄진역 서측 주차환경 개선사업 실시설계용역 착수		‘25.07.22.	이정순 교통과장 김관수 주차시설팀장 염다경 주무관