대덕구 신청사 건립

- 단계 : 기본계획 -

건축과, 이동준, 042-608-5192

구   분

내  용

비  고

일반

현황

○ 소 재 지

대전광역시 대덕구 연축동 230번지 일원

○ 인구 수

176,199명(2021. 1월 기준)

○ 공무원 수

739명/ 729명

정원/현원

○ 재정자립도

13.82%

사업

개요

○ 기존청사

용도

준공연도

부지면적

기준면적

건물연면적

층수

(지하/지상)

비고

합계

15,627.1

16,642

11,894.265

본청

1982

13,495.5

14,061

10,048.035

1/3

의회

2,581

보건소

1988

2,131.6

-

1,846.23

1/2

○ 청사신축 필요성

도시의 균형발전 및 친환경에너지 스마트혁신도시 조성

○ 사업기간

2020 ~ 2026

○ 사업수행방식

미확정

○ 추정(예정)가격

-

계약금액

-

낙찰율

%

○ 청사신축 계획(안)

용도	준공연도	부지면적	기준면적	건물연면적	층수 (지하/지상)	비고
합계		20,035	16,642	35,684
본청	2026	20,035	14,061	14,060	1/6
의무시설				1,100
주민편의시설			-	1,480
의회			2,581	2,200	1/3
보건소			-	3,000	1/3
지하주차장			-	13,844	-

소요

예산액

○ 사업비 조달 현황                                                      (단위 : 백만원)

구분	합계	국비	시도비	시군구비	지방채
합계	120,000			106,100	13,900
당해연도(2021)	26,140	-	-	26,140	-
2022	5,000	-	-	5,000	-
2023	5,000	-	-	5,000	-
2024 이후	83,860	-	-	69,960	13,900

○ 총사업비                                                              (단위 : 백만원)

1) 토지매입비

19,093

비고

2) 설계비

4,497

3) 감리비

4,454

4) 공사비

81,002

5) 기타부대비

894

6) 예비비

10,060

향후

계획

및

일정

구   분

년월

결과

관련기관

비고

중기재정계획

2020.09

수립

자체

타당성 조사

2021.04.

-

자체

미도래

투융자심사

2021.08.

-

중앙

〃

공유재산관리계획

2021.12.

-

지방의회

〃

설계

2022.01.

-

자체

〃

착공

2023.11.

자체

〃

준공

2026.05.

-

자체

〃